Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Odbor dopravy a silničního hospodářství Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, E-mail: e-podatelna(^jy chnov-city.cz_____
Čj: ODSH/18885/09-2009/08/No	Rychnov nad Kněžnou dne 17. srpna 2009
Vyřizuje: Nováková
Telefon: 494509654
E-mail :lidmila. novakova@rychnov-city. cz
Spisový znak: 280. l
Ukládací znak: A/10
Rozhodnutí 104/2009
O prodloužení lhůty k dokončení stavby
(veřejná vyhláška)
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, zastoupen SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové dne 9. července 2009 podal žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby „11/318 a 11/321 Castolovice - Solnice - RŽK 2.stavba - 1. etapa". Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.
Stavba je na pozemcích p.č. 1222/1, 1233, 1226, 496/2, 496/1, 499/9, 1227, 381, (dle PK p.č. 356,1223,381), 1225, 508/37, 508/4, 490/1, 344/3, 496/3, 481/1, (dle PK p.č. 491/5), 495 (dle PK p.č. 491/5), 344/2, 481/1 (dle PKp.č. 491/4), 344/1, 481/1 (dle PKp.č. 491/3), 343/1, 493/2, 1221/1, 1232, 499/10, 468 (dle PK p.č.470,383/1), 499/11, 388/1 (dle PK p.č. 388/1), 499/1 (dle PK p.č. 347,499), 353/3 (dle PK p.č. 359/9), 359/7 (dle PK p.č. 359/9), 381 (dle PK p.č. 380) vk.ú. Castolovice, poz.parcela č. 808, 807, 361, 360 (dle PK p.č. 362/1,360) vk.ú. Synkov, poz.parcela č. 573/1, 573/2 vk.ú. Libel. Tato stavba byla povolena zdejším speciálním stavebním úřadem dne 10. října 2008, č.j. ODl/244/08/Sch, SP 111/2008, které nabylo právní moci dne 21.11.2008.
Městský úřad Rychnov n.Kn., odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální tavební úřad příslušný dle ustanovení §40 odst. 4 písm.c) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 13 zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), podle § 115 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů rozhodl o podané žádosti o prodloužení doby platnosti stavebního povolení takto:
Lhůta k dokončení stavby „11/318 a 11/321 Castolovice - Solnice - RŽK 2.stavba - 1.
etapa" na pozemcích p.č. 1222/1, 1233, 1226, 496/2, 496/1, 499/9, 1227, 381, (dle PK p.č. 356,1223,381), 1225,508/37,508/4, 490/1, 344/3, 496/3, 481/1, (dle PK p.č. 491/5), 495 (dle PK p.č. 491/5), 344/2, 481/1 (dle PK p.č. 491/4), 344/1, 481/1 (dle PK p.č. 491/3), 343/1, 493/2, 1221/1, 1232, 499/10,468 (dle PK p.č.470,383/l),499/l 1,388/1 (dle PK p.č. 388/l),499/l (dle PK p.č. 347,499), 353/3 (dle PK p.č. 359/9), 359/7 (dle PK p.č. 359/9),381 (dle PK p.č. 380) vk.ú. Castolovice, poz.parcela č. 808,807,361,360 (dle PK p.č. 362/1,360) v k.ú. Synkov, poz.parcela č. 573/1, 573/2 v k.ů. Libel
se prodlužuje do 30. listopadu 2011
Odůvodnění:
Stavebník podal speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby snovým termínem 30. 11. 2011 z důvodu realizace stavby 1. etapy v návaznosti na